1. 목적

대한민국건설(주)	품질경영계획서	장 번 호 : QMS-20
		개정번호 : 0
	20 장. 중점품질관리	개정일자 : 2022. 1. 4

/ 3

품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 부적합 공사로 판명될 경우 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 관리하기 위함이다.

2. 적용 범위

중점품질관리 공종의 결정, 투입장비에 대한 기준, 작업자의 자격기준, 작업방법의 결정 및 모니터링 방법 등에 대한 업무에 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 현장공사담당은 중점품질관리 공종을 결정하고 중점품질관리계획서를 수립하여야 한다.

3.2 현장품질관리담당은 중점품질관리계획서의 관리방안에 대해 검토하여야 한다.

3.3. 현장소장은 중점품질관리계획서를 승인하여 공사감독관에게 제출하여야 하며 검토의견이 있을 시 이를 반영하여야 한다.

4. 중점품질관리계획서 수립

4.1 현장공사담당은 계약서, 시공계획서, 시방서, 설계도면, 공정계획, 작업절차서 등을 검토하여 품질관리가 소흘해지기 쉽거나 하자발생빈도가 높으며 시공 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 중점품질관리대상으로 선정하여 다른 공종에 비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인하여야 한다.

4.2 중점품질관리 공종 선정 시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

4.2.1 공정계획에 의한 월별, 공종별 시험종목 및 시험회수

4.2.2 시공자의 품질관리자 및 공정에 따른 충원계획

4.2.3 품질관리 담당 건설사업관리기술인의 인원수 및 직접 입회, 확인이 가능한 적정 시험회수

4.2.4 공종의 특성상 품질관리 상태를 육안 등으로 간접 확인 할 수 있는지 여부

4.2.5 작업조건의 양호, 불량 상태

4.2.6 타현장의 시공 사례에서 하자발생 빈도가 높은 공종인지 여부

4.2.7 품질관리 불량 부위의 시정이 용이한지 여부

4.2.8 시공 후 지중에 매몰되어 추후 품질확인이 어렵고 재시공이 곤란한지 여부

4.2.9 품질 불량 시 인근부위 또는 타 공종에 미치는 영향의 대소

4.2.10 시공이 광활한 지역에서 이루어져 접근이 용이한지 여부

4.3 현장공사담당은 중점품질관리 공종을 선정 후 다음 사항이 포함된 중점품질관리계획서를 작성하여야 한다.

4.3.1 중점 품질관리 공종별로 시공 중 및 시공 후 발생 예상 문제점

4.3.2 각 문제점에 대한 대책방안 및 시공지침

4.3.3 중점 품질관리 대상 구조물, 시공부위, 하자발생 가능성이 큰 지역 또는 부위선정

4.3.4 중점 품질관리대상의 세부관리항목의 선정

4.3.5 중점 품질관리공종의 품질확인을 위한 모니터링 지침

4.3.6 중점 품질관리대장을 작성, 기록관리하고 확인하는 절차

4.3.7 작업에 이용되는 장비에 대한 기준

4.3.8 작업방법 및 작업자의 자격기준

4.3.8 기타 필요사항

4.4 현장품질관리담당은 중점품질관리대상의 선정, 관리대책 방안, 모니터링 지침, 장비 및 작업자의 자격 기준 등에 대한 적절성을 검토하여야 한다.

4.5 현장소장은 중점품질관리계획서를 승인 한 후 발주자 또는 공사감독관이 요구 시 제출하여야하며  검토의견이 있을 시 이를 해결토록 하여야 한다.

5. 중점품질관리 공종의 관리

5.2 현장공사담당은 중점품질관리 공종 및 시공부위는 상황판이나 도면 등에 표기하여 작업자들 뿐 아니라 공사감독관 및 발주자 등도 쉽게 숙지할 수 있도록 하여야 한다. 필요시 해당부위에 “중점품질관리 공종” 팻말을 설치하고 주의 사항을 명기하도록 한다.

5.3 현장소장은 공정계획 시 중점품질관리대상 공종이 동시에 여러개소에서 시공되거나 공휴일 및 야간 등 관리가 소흘해 질 수 있는 시기에 작업이 진행되지 않도록 조정하여야 한다.

5.4 중점품질관리 공종의 품질확인을 위해 현장품질담당 뿐 아니라 공사감독관의 입회하에 검사가 이루어 지도록 하며 필요시 발주자도 입회하도록 검사 및 시험계획서에 포함하여야 한다.

5.5 공사감독관 혹은 발주자에게 입회검사 요청을 하였음에도 합의된 검사시간내에 입회하지 않을 경우에는 자체 검사 확인 후 이상이 없을 경우에는 후속공정을 진행할 수 있다.

6. 첨부

6.1 중점품질관리 프로세스

프로세스 맵핑	입력	출력	책임/승인
No Yes	계약서, 시공계획서, 시방서, 설계도면, 공정계획, 작업절차서	중점품질관리 대상 공정 및 부위 선정	현장공사담당
	예상문제점, 세부관리항목, 품질확인점, 작업방법, 작업자 기준 등	중점품질관리계획서	현장공사담당
	대상공정 및 부위 선정, 예상문제점, 세부관리항목, 품질확인점, 작업방법, 작업자 기준 등	중점품질관리계획서	현장공사담당/품질담당/현장소장
	대상공정 및 부위 선정, 예상문제점, 세부관리항목, 품질확인점, 작업방법, 작업자 기준 등	중점품질관리계획서	현장소장 공사감독관(요구 시)
	중점품질관리계획서	상황판, 도면 및 팻말 표시	현장공사담당
	작업절차서, 중점품질관리계획서	검사의뢰서	현장품질담당/공사감독관/발주자
	검사 및 시험계획서, 중점품질관리계획서	검사보고서	현장품질담당/공사감독관/발주자

첨부 1. 중점품질관리 프로세스

중점품질관리 대상 공정 및 부위

검토 및 승인

중점품질관리계획서

공사감독관 제출

(요구 시)

시공 및 품질확인(입회점)

중점품질관리 대상 공종 및 부위 식별

합부판정

후속공정 진행